수자원공사

2002년도 신규공사 집행계획서(본사)

ㅇ 문의 : 회계처 계약부 042-629-2615, 2616, 2637 (단위 : 백만원)
순번	사업구분	공 사 명	공 사 개 요	공종	공사 기간	금 액	2002년 금 액	발 주 예정월	착 공 예정월	계약 방법
1	댐건설	한탄강댐 건설공사	댐높이 85m 댐길이 705m	토목	1,560일	326,300	5,800	3	12	일괄 입찰
2	단지조성	시화지구 1단계 확장단지 제4공구 조성공사	부지조성 1.8□	토목	3,280일	200,000	3,700	3	12	일괄 입찰
3	단지조성	시화지구 1단계 확장단지 제5공구 조성공사	부지조성 1.8□	토목	3,280일	200,000	3,700	3	12	일괄 입찰
4	하수도	장계하수종말처리시설공사	하수처리장 2천톤/일 관로 8Km	토건 기전 계장	630일	7,577	5,500	3	5	제한
5	단지조성	구미4단지 가로등및 신호기설치공사	ㅇ가로등 800본 ㅇ교통신호기 20개소	전기	720일	1,000	670	3	4	제한
6	수도건설	전남남부권 전기방식공사	도송수관로 전기방식공사	전기	650일	983	200	3	4	제한
7	기타	가정용수의 용도별 유량원격측정장치 제작설치 공사	유량계 750대 및 자료수집기 설치 원격측정시스템구축	기전 통신	900일	800	200	3	4	제한

8	수도건설	동화댐계통 임실계통 추가송수관로 가압장 전기시설공사	가압장 2개소 전기시설공사	전기	150일	120	120	3	4	제한
		1/4분기 계 8 건				736,780	19,890
1	단지조성	구미4단지 조경공사	ㅇ어린이공원 3개소 ㅇ녹지7개소	조경	730일	2,400	1,000	4	5	제한
2	기타	안동 여수로 수문권양설비 개·대체	권양기 대체 : 4sets - 동력전달축 대체 - 기어치면 열처리	기계	240일	500	500	4	5	제한
3	수도건설	구미4단지 공업용수도 전기시설공사	정수장 전기시설공사	전기	500일	463	20	4	5	제한
4	기타	수차발전기 상태진단시스템구축	센서, 테이터베이스 진단 프로그램 설치	기계	240일	300	300	4	5	제한
5	기타	본사 케이블 교체	본사구관 통신케이블 교체	통신	100일	150	150	4	5	일반
6	댐건설	감포댐 건설공사	댐높이 35m 댐길이 108m	토목	1,095일	13,400	2,700	5	7	제한
7	수도건설	전남남부권 전기시설공사	가압장 5개소 전기시설공사	전기	650일	1,158	100	5	6	제한
8	수도건설	진안하수처리장 전기시설공사	건축전기, 수변전 및 동력설비공사	전기	540일	650	180	5	6	제한
9	댐건설	탐진다목적댐 조경공사	조경공사	조경	730일	7,000	1,500	6	8	제한
		2/4분기 계 9 건				26,021	6,450
1	수도건설	충남중부권 광역상수도 사업 시설공사	시설공사 1식	토목 기계	1,200일	147,960	1,000	7	10	PQ
2	경인운하	경인운하 대체시설 귤현교 공사	- 토 공 : 94,129□ - 콘크리트 : 80,485□ - 포장 및 부대공 : 1식	토목	960일	123,530	3,000	7	10	PQ

3	경인운하	경인운하 대체시설 시천교 공사	- 토 공 : 96,129□ - 콘크리트 : 47,395□ - 포장 및 부대공 : 1식	토목	840일	75,567	3,000	7	10	PQ
4	경인운하	경인운하 대체시설 쓰레기수송교 공사	- 토 공 : 144,264□ - 강 재 : 1식 - 포장 및 부대공 : 1식	토목	730일	61,824	3,000	7	10	PQ
5	수도건설	수도권(경기북부)급수체계조정 1차사업 시설공사	관로 D=1,200∼600mm, L=31km,가압장 72천□/일	토건 기전	450일	33,417	6,468	7	10	PQ
6	수도건설	원주권광역상수도사업 조경공사	조경공사	조경	365일	1,820	1,820	7	8	제한
7	수도건설	장계하수처리장 전기시설공사	건축전기, 수변전 및 동력설비공사	전기	540일	550	150	7	8	제한
8	수도건설	광양3단계 전기방식공사	전기방식공사 1식	전기	450일	450	100	7	8	제한
9	수도건설	대곡댐 조경공사	조경공사	조경	400일	2,000	500	8	9	제한
10	단지조성	시화지구 1단계 확장단지 제1공구 조성공사	부지조성 2.2□	토목	3,280일	241,000	4,600	9	12	제한
11	단지조성	시화지구 1단계 확장단지 제2공구 조성공사	부지조성 2.6□	토목	3,280일	279,000	5,400	9	12	제한
12	단지조성	시화지구 1단계 확장단지 제3공구 조성공사	부지조성 2.1□	토목	3,280일	230,000	4,400	9	12	제한
		3/4분기 계 12 건				1,197,118	33,438
1	단지조성	시화하수처리장 슬러지 cake소각시설 설치공사	소각시설 1식	기계	240일	8,000	1,000	10	2003년	일괄 입찰
2	하수도	탐진댐유역 하수종말처리시설 공사	하수종말처리장 중계펌프장 차집관로	토건 기계	360일	7,673	7,673	10	12	제한
3	수도건설	울산권광역상수도사업대곡댐 연결도로 건설공사	도로개설 L=5.0km	토목	450일	6,500	1,000	10	12	제한

4	수도건설	남강2단계 덕천가압장 전기시설공사	건축전기, 동력설비공사 등	전기	540일	430	210	10	11	제한
5	수도건설	전남서부권(평림댐)광역상수도사업 도송수시설공사	관로 76.7km, 가압장 1개소	토건 기계	730일	28,556	-	11	2003년	제한
6	댐건설	화북댐건설공사	댐높이 47m 댐길이 445m	토목	1,560일	97,558	-	12	2003년	제한
		4/4분기 계 6 건				148,717	9,883
		계 35 건				2,108,636	69,661