2002년 항만공사 조기발주계획

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업량	사업비	추 진 계 획		비 고
				설계완료일	발주요청일
합 계 (65건)			639,923
	부산청 (9건)		184,242
	▣부산신항 방파제	축조 220m	9,047	□01.12.29	□02. 1. 3	계속비사업
	▣부산신항 호안1공구	호안 1,432m, 교량 703m	53,056	〃	〃
	▣부산신항연결잔교	하부 200m	11,813	'01.12.29	'02. 3.11	2/4
	▣부산신항호안(2공구)	호안 2,244m	71,800	01.1.15		PNC 위탁
	▣2부두남측잔교 개축	개축 160m 등	7,912	□01.12.26	□01.12.29
	▣부두순환도로(2공구)	교량상부 2.4□ 등	10,420	〃	〃
	▣부두순환도로(2공구) 전기	조명시설 1식	90	〃	〃
	▣역무선부두	파제제 96m 등	9,090	〃	〃
	▣양산ICD인입철도	교량, 제방이설 등	11,014	〃	〃
	인천청 (9건)		70,425
	▣평택 동부두 축조(2차)	안벽 108m	19,350	□01.12.30	□02. 1.15	이월소진
	▣평택 외곽호안	상부 2□등	7,326	□02. 1.30	□02. 2. 1	단면변경
	□평택 수로준설	준설 170만□	10,000	□01.12.30	□02. 1. 3
	□평택항 항로준설	준설 80만□	5.000	□01.12.30	□02. 3.15	2/4
	□인천 북항 항로준설	준설 120만□	5,984	□02. 2.10	□02. 2.15	2/4
	□인천 북항 관공선부두	축조 94m	3,899	□02. 2.10	□02. 2.15	2/4
	▣갑문문짝증설	토목, 기계, 전기등	10,000	□01.12.20	□01.12.26
	□제3준설토투기장호안	호안 1.7□	5,000	□02. 2.28	□02. 3.10	2/4
	□제6부두 축조	안벽 130m	3,866	□01.12.30	□02. 1. 3
	마산청 (3건)		11,620
	▣삼천포항 물양장	상부 100m,하부 125m	1,930	'02. 3.10	'02. 3.15	2/4
	▣진해 속천항 건설	물양장 200m, 방파제 75m	4,800	'01.12.30	'02. 2. 6	이월소진
	▣마산항 5부두	하부 30m, 상부 53m	4,890	'01.12.25	'01.12.29
	울산청 (3건)		47,552
	▣울산신항 방파제 (1단계 1공구)	축조 86m	39,554	'01.12.29	'01.12.31
	▣8부두 안벽	상부 375m	3,998	'01.12.29	'01.12.31
	□9부두 안벽	축조 75m	4,000	'01.12.29	'02. 1.10

※  ▣ : 계속공사(장기계속계약, 단년도 수의계약계속공사)    □ : 신규 발주공사

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업량	사업비	추진계획		비 고
				설계완료일	발주요청일
	여수청 (10건)		86,772
	□광양항진입항로준설	토사 84천□, 암 265천□	25,278	□01.12.31	□02. 1. 3
	□광양항2단계묘도가호안	호안 975m	9,757	□01.12.31	□02. 2. 1	집행심의
	□광양항2단계항로준설	토사 3백만□, 암 45천□	24,965	□01.12.31	□02. 1. 3
	□광양항율촌진입항로준설	토사 746천□	5,000	□01.12.31	□02. 1. 3
	▣여수항 안벽 및 가호안	가호안 140m 등	3,424	□01.12.31	□02. 1. 3
	▣여천항 관공선부두 및 일반부두	가호안, 포장, 준설 등	3,170	□01.12.31	□02. 1. 3
	▣여수구항 정비	방파제상부160m,물양장하부 214m	4,618	□01.12.26	□01.12.27
	□녹동항(신·구항 연결교량)	교량 100m	4,500	□01.12.31	'02. 2.15	2/4
	□광양항 석유화학부두	안벽 330m	2,000	□01.12.31	'02. 2.20	2/4
	▣나로도항 서방파제	상부 100, 하부 29m	4,060	□01.12.13	'01.12.15
	동해청 (5건)		30,322
	▣묵호항 방파제	축조 46m	4,582	□01.12.30	□02. 1. 3
	▣묵호항 방사제	축조 250m	3,940	□01.12.30	□01. 1. 3
	▣속초항 신수로 교량	상부공 1식	18,100	□01.12.30	□01. 1. 3
	▣삼척항 방파제	축조 150m	2,500	□02. 3.10	□02. 3.15	2/4
	▣주문진항 월류제	축조 66m	1,200	□02. 3.10	□00. 3.15	2/4
	군산청 (5건)		83,746
	▣남측안벽 2공구	상부 400m	25,000	-	-	계속비사업
	▣북방파제	상부 500m, 하부 300m	32,900	□01.12.17	□01.12.20
	□준설	가토제 450m 준설 1,426천□	17,456	□01.12.20	□01.12.21
	▣내항 가호안	상부 150m	2,000	□01.12.20	□02. 1. 2
	▣국제여객부두·승강시설	함선 1식	6,390	□01.12.20	□01.12.28

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업량	사업비	추진계획		비 고
				설계완료일	발주요청일
	목포청 (8건)		44,836
	▣북항물양장	중부 200m	8,410	□01.12.31	□02 1. 3
	▣대반동가호안	상부 263m,보수보강 1식	5,856	□01.12.31	□02 1. 3
	▣기존시설물보강(내항)	보강 3.5□	5,000	□01.12.31	□02. 1.10
	▣남항호안	하부 144m, 보강1식,	4,824	□01.12.31	□02. 1. 3
	▣북항소형어선물양장	하부 380m	3,000	□01.1.31	□02. 2. 8
	▣용당 연안화물부두	상부 300m, 매립 1식	5,594	□01.12.31	□02. 1. 3
	▣완도항 물양장	상부441m, 매립1식	5,300	□01.12.31	□02. 1. 3
	▣홍도항 방파 호안	상부 30m, 중부 30m	6,852	□01.12.31	□02. 1. 3
	포항청 (5건)		29,792
	▣영일만신항 북방파제	기초, 구체, 상부공	16,000	□01 12.28	□02. 1. 3
	▣구룡포항 방파제	축조 34m	1,792	□02. 1. 5	□02. 1. 3
	▣후포항 방파제	축조 12m	1,200	□02. 3.10	□02. 3.15	2/4
	▣울릉(사동) 방파제	축조 30m	6,800	□01.12.30	□02. 1. 3
	▣울릉(사동)방파호안	축조 93m	4,000	□01.12.22	□01.12.26
	제주청 (6건)		42,191
	▣제주외항 방파제	방파제,어업권 및 설계보상비	9,906	□01.12.31	□02. 1. 3
	▣제주항 어항구 방파제	축조 101m	2,500	□01.12.31	□02. 1. 3
	▣제주 연안여객터미날	신축 1동	2,000	□02. 2.28	□02. 3. 2	2/4
	▣서귀포항 방파제	축조 40m	8,045	□01.12.31	□02. 1. 3
	▣서귀포항 안벽	안벽하부 214m	4,700	□01.12.31	□02. 1. 3
	▣화순항 방파제 및 안벽	방파제 110m 등	15,040	□01.12.31	□02. 1. 3
	대산청 (2건)		8,425
	▣대천항 개발	포장, 전기, 상수도 등	5,425	□01.12.30	□02. 1. 3
	▣비인항 방파제	축조 50m	3,000	□01.12.30	□02. 1. 3