2003년 항만공사 조기발주 계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 목    적

O 2003년도 주요항만공사의 조기발주로 경기활성화 및 고용효과 증대

O 항만공사의 적정한 공사기간 확보로 이월 최소화

□ 주요내용

O 조기발주 대상공사 선정 기준

- 1/4분기 예산배정사업, 2/4분기 예산배정사업중 1/4분기 발주요청사업

·주요세항(7개)사업, 신항만건설사업, 일반항건설공사

O 조기발주 대상공사

- 2003년도 주요항만건설공사 총93건,  8,631억원 중

·조기발주공사(1/4분기) : 74건,  7,901억원 (92%)

※ □01년 실적 : 59건 6,122억원(85%)

- 2/4분기 이후 발주 : 19건,  730억원 (8%)

(단위 : 억원)

청 별	전 체		조기발주 (1/4분기)		2/4분기이후 발주
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	93	8,631 (100%)	74	7,901(91%)	19	730 (8%)
부 산	10	1,926	7	1,718	3	208
인 천	17	1,287	13	1,145	4	142
마 산	7	155	6	137	1	18
울 산	4	642	3	617	1	25
여 수	15	1,674	11	1,515	4	159
동 해	5	111	5	111	-	-
군 산	7	954	7	954	-	-
목 포	12	548	7	380	5	168
포 항	6	473	6	473	-	-
제 주	8	624	7	614	1	10
대 산	2	237	2	237	-	-

※ 설계, 감리, 보상비, 유지보수는 제외

2003년 항만공사 조기발주계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	발 주 요 청		비 고
			계 획	실 적
합 계 (74)		790,143		46건 622,302	19건 299,467
부산청 (7건)		171,821
▣부산신항 호안(1공구)	호안 2,332m	36,728	'03. 1.15	'03. 1.21
▣부산신항 호안(2공구)	호안 3,703m	52,375	'03. 1.20	'03. 1.20	착공1.20
▣부산신항 연결잔교	잔교 185m	16,704	'03. 1.15	'03. 1.14
▣부산신항 진입도로	도로 기초1식	30,930	'03. 1.15	'03. 1.15
▣부두순환도로(2공구)	접속램프674m 등	10,178	'03. 1. 6	□03. 1.30
▣역무선부두	파제제 269m 등	7,906	'03. 1. 6	'03. 1. 8	착공1.20
▣양산ICD인입철도	교량 등	17,000	'03. 3. 6
인천청 (13건)		114,534
▣평택 동측일반부두	중부 320m	16,740	□03. 1. 30	□03. 1.13	착공1.23
▣평택 수로준설	230만□	14,308	□03. 1. 30	□03. 1.30
▣평택 국제여객부두	함선 등	9,400	□03. 1.30
▣인천 북항 투기장(1,2공구)	보강 500m	4,000	□03. 3.20
▣인천 북항 영종도투기장	축조 2.3km	3,000	□03. 3.20
▣인천 북항 준설	126만□	7,000	□03. 1.10	□03. 1.17
▣인천 북항 관공선부두	축조 143m	7,700	□03. 2. 5	□03. 1. 8
□인천 북항 목재부두	축조 48m	5,088	□03. 3.27
▣제3준설토투기장호안	호안 1.6□	10,000	□03. 1.10	□03. 1.14
▣남항준설	준설4.5백만□	21,920	□03. 1.10	□03. 1.17
□제1항로 증심준설	준설278천□	5,000	□03. 3.27
▣제6부두 축조	축조 50m	1,110	□03. 3.27
▣갑문문짝증설	토목, 기계, 전기등	9,268	□03. 3.27

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	발 주 요 청		비 고
			계 획	실 적
마산청 (6건)		13,697
▣삼천포항 전기시설	전기시설 1식	860	'03. 3.20
▣삼천포항 물양장	상부 18m	160	'03. 3.20
▣삼천포항 준설	토사 65천□	2,130	'03. 3.20
□고현항 투기장호안	축조 75m	2,592	'03. 1. 15
▣진해 속천항 방파제	축조 66m	3,000	'03. 3.20
▣마산항 5부두	상부 106m	4,955	'03. 1.15	□03. 1.21
울산청 (3건)		61,635
▣울산신항 방파제	상부 56m	58,254	'02.12.25	'02.12.31	착공1.14
▣울산신항 작업부두	축조 40m	1,960	'03. 3.30
▣9부두 안벽	축조 75m	1,421	'02. 12.30	'03. 1. 8	착공1.20
군산청 (7건)		95,425
▣남측안벽 2공구	상부 250m	16,527	□03. 1. 3	□03. 1. 1	착공1.1
▣북방파제	축조 480m	30,000	□03. 1. 3	□02.12.24	착공1.21
□남측안벽배후부지조성	부지조성 1식	22,705	□03. 1. 3	□03. 1. 3
▣내항 가호안	축조 775m	8,000	□03. 1. 3	□03. 1.15
▣연안여객부두	상부 1식	3,443	□03. 1. 3	□03. 1. 3	착공1.27
□역무선부두	하부 1식	3,000	□03. 1. 3	□03. 1. 6
▣국제 및 연안여객터미널	골조 1식	11,750	□03. 1. 3	□03. 1. 6
동해청 (5건)		11,105
▣묵호항 방파제	축조 50m	1,080	□03. 3. 3
□묵호항 물양장	축조 150m	3,000	□03.2. 21	□03. 1.18
□묵호항 호안	축조 150m	3,000	□03.1. 11	□03. 1.17
▣삼척항 방파제연장	축조 32m	3,000	□03. 2. 3
▣주문진항 방파제절개 및 해수교환방파제,월류제	축조 113m	1,025	□03. 1.21	□03. 1.20	착공1.30

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	발 주 요 청		비 고
			계 획	실 적
여수청 (11건)		151,460
▣광양항2단계묘도가호안	호안 871m	14,302	□03. 1.17	□03. 1.22
▣광양항2단계항로준설	암 147천□	20,000	□03. 1.17
▣광양항2단계진입항로준설	토사 335천□	25,578	□03. 1.17
▣광양항3단계가호안(1공구)	호안 1,875m	30,000	□03. 1. 7	□03. 1. 30
▣광양항율촌진입항로준설	토사 1,148천□	8,500	□03. 2. 5
□광양항3단계항로준설	토사 1,352천□	10,000	□03. 2. 5
▣광양항 서측도로	기초 1.040m	20,000	□03. 1.16	□03. 1.21
▣여수구항 정비	호안 및 친수하부449m 물양장상부 214m	6,000	□03. 1.17	□03. 1.21
▣여천항 호안	축조 685m	7,855	□03. 1.17	□03. 1. 30
▣여천산단 접안시설	축조 175m	6,500	'03. 3.16
▣녹동항(신·구항 연결교량)	상부 100m	2,725	'03. 1.17
목포청 (7건)		38,030
▣기존시설물보강(내항)	보강 793m	3,000	□03. 1.18	□03. 1.23
▣북항물양장	축조 368m	9,960	□03. 1.18	□03. 1.24
▣대반동가호안	축조 226m	3,000	□03. 1.18	□03. 1.23
▣남항호안	상부 905m	4,100	□03. 1. 3	□03. 1. 3	착공1.17
▣용당 연안화물부두	하부 1식	2,500	□03. 2. 27
▣완도항 물양장	축조 334m	5,470	□03. 1. 3	□03. 1. 7	착공1.23
▣홍도항 외곽시설	축조 33m	10,000	□03. 2. 12
포항청 (6건)		47,320
▣영일만신항 북방파제	기초 31m, 구체 434m, 상부공 750m	29,000	□03. 1. 10	□03. 1. 6	착공1.20
□포항호안부두 개축	개축 52m	2,840	□03. 1. 11	□03. 1. 20
▣구룡포항 방파제	축조 25m	2,480	□03. 2. 10	□03. 1. 27	착공1.30
▣울릉(사동) 방파제	축조 28m	7,000	□03. 1. 10	□03. 1. 14	착공1.30
▣울릉(사동)방파호안	축조 52m	4,000	□03. 1. 10	□03. 1. 14	착공1.30
▣울릉(사동)어선 및 여객부두	축조 100m	2,000	□03. 1. 23	□03. 1. 30

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	발 주 요 청		비 고
			계 획	실 적
제주청 (7건)		61,390
▣제주항 어항구 방파제	두부 1식	4,600	□03. 2. 20
▣제주 연안여객터미날	신축 1동	3,750	□03. 3. 31
▣제주외항 서방파제	축조 280m	29,000	□03. 1. 6	□03. 1. 2	착공1.15
▣서귀포항 외항안벽 등	안벽하부 167m	7,000	□03. 1. 6	□03. 1. 2	착공1.13
□서귀포항 남방파제	접속부 27m	2,000	□03. 3. 31
▣화순항 방파제	방파제 97m 등	12,000	□03. 1. 6	□03. 1. 6
▣화순항 안벽	안벽 150m 등	3,040	□03. 2. 20
대산청 (2건)		23,726
▣대산항 개발	외곽시설, 투기장호안, 부대시설 등	21,258	□03. 1. 10	□03. 1. 13	착공1.30
▣비인항 건설공사(방파제,물양장,호안)	축조 99m	2,468	□03. 1. 10	□03. 1. 13	착공1.30

※  ▣ : 계속공사(장기계속계약, 단년도 수의계약계속공사)    □ : 신규 발주공사

2003년 항만공사 2/4분기 이후 발주계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	추 진 계 획		비 고
			설계완료일	발주요청일
합 계 (19건)		72,972
부산청 (3건)		20,820
▣부산신항 준설	준설 4.7백만□	13,820	□03.5.10	□03. 5. 15
□부산신항 진입철도	철도하부0.4km	4,000	'03.11.30	'03.12. 1
□국제여객 및 해경부두	축조 133m 등	3,000	□03.6. 8	□03.6.30
인천청 (4건)		14,180
□평택 서부두(2공구)	축조 36m	5,000	□03.6.15	□03. 6.20
□평택 외곽호안(2공구)	축조 455m	5,000	□03. 4.15	□03. 4. 20
□평택 배수로정비	정비 560m	2,000	□03.6.15	□03. 6. 20
□용기포항 외곽시설	도제 34m	2,180	□03. 5. 8	□03. 6.10
마산청 (1건)		1,800
▣진해 속천항 물양장	축조 100m	1,800	'03.6.20	'03. 6. 21
울산청 (1건)		2,500
□소형선부두	파제제59m	2,500	'03.3.30	'03. 4.10
여수청 (4건)		15,840
□광양항중마일반부두	가호안 151m	2,000	□03.8.30	□03. 9. 1
□광양항 배후부지개발	지반개량 2,920a	9,660	□03.10.1	'03.10.2
▣여수항 안벽	지반개량 등	4,026	□03.6.20	□03.6. 21
□녹동항 전기시설	전기 1식	154	□03.3.30	'03. 4. 1
목포청 (5건)		16,802
□연안여객터미널	기초 1식	4,800	□03.8.30	□03. 9. 5
▣북항소형어선물양장	중부 520m	6,000	□03.3.30	□03. 4. 3
□대불항 안벽	하부 m	2,950	□03.9.25	□03 10. 5
▣대흑산도항 물양장	축조 140m	1,792	□03.3.30	□03. 4. 6
□대흑산도항 해수유통시설	축조 100m	1,260	□03.3.30	□03. 4. 6
제주청 (1건)		1,030
▣제주항 서방파제 철거	철거 250m	1,030	□03.6.15	□03. 6. 30