도로 포장 및 유지공사 표준품셈 적용 안내

1. 작업조 개념의 도입

- 시공의 현장 적용성 및 객관화를 위하여 작업조 개념을 도입함

- 기존 품셈의 경우 기준 작업량에 대한 인력품을 소수(예:보통인부 2.45인)의 형태로 표시함

- 개정 품셈의 경우 일당(8시간 기준) 소요인원과 소요장비를 바탕으로 시공 가능한 시공량을 표현함

(1) 기존품셈

12-5 보조기층공

(100㎡당)

두 께 (㎝)	특 별 인 부 (인)	보 통 인 부 (인)
20	0.2	4.0

[주] ① 그레이더를 사용할 경우에는 인력품을 10%로 보며 인력 살수시에는 살수품을 100㎡당 인부 1인을 가산한다.

② 기계 사용시 살수 및 전압의 손료와 운전경비는 별도로 계상한다.

③ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

【단가적용】

가. 기준 - 그레이더 포설능력 Q값을 기준으로 산정

나. 적산 방법 - 모우터 그레이더의 유효폭, 포설두께, 작업거리, 속도 등 작업 능력으로 적용함. 기타 포설장비의 경우에도 각각의 Q값을 산정하여 이에 따른 금액 결정. (각각의 금액에 대한 조건을 임의로 결정하여 사용함, 세부 공정에 대한 언급 미비)

(2) 개정품셈

12-2-2 보조기층

1. 인력식 소규모 장비사용 시공

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격
보통인부	4	굴삭기 진동로울러(핸드가이드식) 살수차	0.7㎥ 0.7ton 5,500ℓ	150

[주] ① 본 품은 소로, 단지내 도로, 유지보수 등 보조기층 인력식 소규모 장비사용 시공에 대한 품이다.

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

③ 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

④ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

2. 기계시공-길어깨 포장

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격
특별인부 보통인부	1 2	굴삭기 타이어로울러 진동로울러 살수차	1.0㎥ 8-15ton 10ton 16ton	225

[주] ① 본 품은 보조기층 기계시공-길어깨 포장에 대한 품이며, 콘크리트 포장 길어깨의 보조기층 포설 및 다짐을 기준한다.

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

③ 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

④ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

3. 기계시공-본선포장

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격
특 별 인 부 보 통 인 부	1 2	모우터 그레이더 타이어로울러 진동로울러 살수차	3.6m 8-15ton 10ton 16ton	550

[주] ① 본 품은 보조기층 기계시공 중 본선포장에 대한 품이다.

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

③ 순수 인력 살수시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

④ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

【단가적용】

가. 기준 - 1일 시공량 : 550 m3/일

- 시간당 시공량 : 550 (m3/일) / 8(hr/일) = 68.75(m3/hr)

나. 기계경비 : 시간당 경비로 적산되며, 시간당 시공량 Q값을 적용함

다. 노 무 비 : 일당 노임으로 고시되며, 시간으로 환산(÷8)후 시간당 시공량 Q값을 적용함

2. 가산 및 감산의 적용

- 시공 조건에 따라 가산 및 감산을 주기사항에 명시함

- 시공량의 가산 및 감산은 할증의 개념으로 가산 및 감산의 조건에서는 제시된 1일 작업가능 시공량에서 주기에 따라 시공량을 적용하여 적산함

(1) 기존품셈

12-5 보조기층공

(100㎡당)

두 께 (㎝)	특 별 인 부 (인)	보 통 인 부 (인)
20	0.2	4.0

[주] ① 그레이더를 사용할 경우에는 인력품을 10%로 보며 인력 살수시에는 살수품을 100㎡당 인부 1인을 가산한다.

② 기계 사용시 살수 및 전압의 손료와 운전경비는 별도로 계상한다.

③ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

【단가적용】

가. 기준 - 주기사항에서의 “인력품을 10%로 보며”를 인용

나. 적산기준 - 기계로 시공할 경우 100㎡당 특별인부 0.02인, 보통인부 0.4인으로 계산함.

(2) 개정품셈

5. 표면평탄작업

(일당)

배치인원(인)			사용기계 (1대)		시공량 (㎡)
			명칭	규격
절삭, 청소	작업반장 보통인부	1 1	그라인딩 장비 로우더(타이어) 살수차	W=1.25m 0.57㎥ 5,500리터	1,100

[주] ① 본 품은 표면 평탄작업의 그라인딩, 청소에 대한 품이다.

② 작업면적이 10㎡이하이고 작업개소가 분산된 소규모 포장 공사일 경우, 일당 시공량의 30% 범위 내에서 감하여 적용할 수 있다.

③ 그라인딩 장비의 기계경비는 노면파쇄기(2m)의 값을 적용한다.

④ 폐자재 수거에 대한 운반비는 별도 계상한다.

【단가적용】

가. 기준 - 주기사항에서의 “일당 시공량의 30%범위 내에서 감하여 적용할 수 있다”를 인용

나. 적산방법 - 조건이 해당하는 경우 일당 시공량을 770㎡로 적용하여 계산함. (동일 물량 적산시 인력품과 기계품이 증가하게 됨)

3. 공통사항의 적용

- 품셈에서의 중복을 피하기 위하여 포설준비작업 및 교통안전처리에 대한 인력품은 [12-1 공통사항]으로 편제함

- 공통사항은 도로포장 및 유지공사의 전공정에 걸처 적용이 가능함

- 교통안전처리의 경우 공정의 특성에 따라 추가적인 인원의 적용이 필요한 경우 주기사항에 명시함

(1) 기존품셈

【단가적용】

가. 기준 - 포설준비공의 경우 유도선 설치라는 항목이 있으며, 아스팔트 혼합물 포설의 경우 포설준비 항목이 추가적으로 규정되어 있음. 신호수의 경우 각 품에 포함되어서 적용되어 있음.

(2) 개정품셈

12-1 공통사항

12-1-1 포장포설 준비작업

(일당)

배치인원(인)		시공량 (m)	비 고
시 공 측 량 사 보 통 인 부	1 2	2,000

[주] ① 본 품은 포장공의 포설 준비 작업이며, 시공 측량 및 유도선 설치에 대한 품이다.

② 유도선(String Line)설치에 따른 재료(스틱, 와이어선등)는 사용 횟수에 따라 별도 계상한다.

12-1-2 교통통제 및 안전처리

(일당)

배치인원(인)		배치기준	비 고
보 통 인 부	2	공구 연장 500m 미만
보 통 인 부	3	공구 연장 500m 이상

[주] ① 본 품은 도로포장 및 유지공사에 공통적으로 적용되는 교통 안전처리에 대한 품이다.

② 본 품은 교통통제나 안전처리가 요구되는 공정 및 현장에서, 공정에 대한 작업자의 품에 더하여 별도 계상 할 수 있다.

③ 도로의 확포장, 유지보수, 교통통제가 필요한 부대공 및 교통안전공에 본 품을 적용한다.

【단가적용】

가. 기준 - 주기사항에 명시된 조건에 맞고 각 공정이 필요한 경우 각 공정별 품에 추가적으로 계상함.

나. 적산 방법 - 아스팔트 덧씌우기의 경우 일당 시공량이 본선의 경우 5,000㎡이며 투입 인원이 포장공 4명, 보통 인부 1명이나 교통통제가 필요한 경우 시공량당 교통통제 및 안전처리를 위한 인원을 2-3명 추가할 수 있음. 또한 포설 준비작업이 필요한 경우 이므로 시공 길이에 따라 포설준비에 대한 시공측량사 및 보통 인부를 추가적으로 계상할 수 있음

다. 특이사항 - 슬러리 실 등 추가적인 교통처리 인원이 필요한 경우 각 공정의 주에서 추가적인 인력품을 규정하고 있음