수자원공사

2002년도 신규공사 집행계획서(현장)

(단위:백만원)

순번	공 사 명	공 사 개 요	공종	공사 기간	금 액	2002년 금 액	발주 예정월	착공 예정월	계약 방법	발 주 현장사무소	전화
1	굴포천 임시방수로 지중통신관로 이설공사	4개소 맨홀 8개, 연장 3km	토목 통신	90일	165	165	1	1	제한	경인운하건설단	032-561-9671
2	유지보수용 자재구입	변압기유, 작동유, 디젤발전기 연료 : 1식 발전설비용 유지보수 자재 : 1식	기계 전기	년중	10	10	1	1	제한	안동댐관리단	054-850-4222
3	제1수력 제2호 수차발전기 대점검보수공사	설비유지보수	기계, 전기	10일	30	30	1	2	일반	충주권관리단	043-840-1222
4	원동구(취) 인입선로 교체공사	케이블(3.3KV 1C 500□) 1650m 케이블 단말처리재 및 기타 1식	전기	150일	147	147	1	2	일반	울산권관리단	052-259-6249
5	제1수력 제4호 수차발전기 대점검보수공사	설비유지보수	기계, 전기	20일	30	30	1	2	일반	충주권관리단	043-840-1222
6	조경유지보수	경상보수(전지, 제초 등)	조경	300일	80	80	1	2	일반	충주권관리단	043-840-1215
7	상수관로 이설공사	900 1열, 500 3열	토목 기계	90일	686	686	1	2	제한	경인운하건설단	032-561-9671
8	운문소수력발전소 제어 및 감시시스템 구축공사	0 감시제어설비 : 3식	통신	70일	168	168	2	2	일반	운문댐관리단	054-370-7253
9	3,4단계 도송수관로 전기방식 연차별 보수공사	정류기 8SET,착정 32개소 양극 : 256개	전기	60일	300	300	2	3	일반	성남권관리단	042-629-0000
10	슬러지인발밸브 점검 및 보수	슬러지 인발밸브 32대 점검 및 보수	기계	120일	120	120	2	3	일반	사천권관리단	055-851-5252
11	원동구(취) 배전반 교체공사	배전반교체 (780*2000*2400)18면, 콘덴샤 (100kva ) 교체8개 등	전기	150일	456	456	2	3	일반	울산권관리단	052-259-6249
12	수도시설물유지보수공사	휀스보수교체:500m, 변실맨홀뚜껑 보수 및증고	토목	210일	70	70	2	3	일반	울산권관리단	052-259-6222
13	2002년 경상 보수공사 (상반기)	경상보수(긴급, 점검 등)	토목 건축	270일	90	90	2	3	일반	충주권관리단	043-840-1215
14	댐 및 부대시설 유지보수공사	댐시설물 및 도로 유지보수외 다수	토목	300일	150	150	2	3	일반	소양강댐관리단	033-259-7214

15	제1수력 제4호 SPIRAL CASING 내부도장공사	설비유지보수	기계	50일	50	50	2	3	일반	충주권관리단	043-840-1222
16	제1수력 발전소내 노출 수압철관 도장공사	설비유지보수	기계	50일	80	80	2	3	일반	충주권관리단	043-840-1222
17	댐좌안 지하수개발공사	지하수 개발	영선	90일	30	30	2	3	일반	충주권관리단	043-840-1215
18	제1,2호 발전기 보조설비 제어반(MCC반) 제조구매설치	보조기기 제어반 교체 : 1식/호기	전기	150일	100	100	2	3	제한	안동댐관리단	054-850-4222
19	제1,2호 수차발전기 고효율 운전장치 제조구매설치	고효율 운전장치 제작 소프트웨어 개발 설치 및 시운전	전기 기계	150일	55	55	2	3	제한	안동댐관리단	054-850-4222
20	Bulk Head Gate Rubber Seal 교체 및 도장	Rubber Seal 교체 : 1식 Gate 및 주변기기 도장 : 1식	기계	150일	80	80	2	3	제한	안동댐관리단	054-850-4222
21	제1,2호 액체저항기 정밀점검	액체저항기 저항액 교체 전극 및 접점점검 등	전기	150일	60	60	2	3	제한	안동댐관리단	054-850-4222
22	성남정수장 여과지 굴상 및 세척공사	* 4단계 여과지 7지	토목	180일	60	60	3	3	일반	성남권관리단	031-720-7772
23	사업장 이토제거	정수장 청소면적 : 158,400□	토목	210일	55	55	3	3	일반	과천권관리단	02-500-8423
24	각사업장 수도시설물 청소	반월 : 30000□ , 시흥 : 80000□ , 정수지 : 20000□	토목	240일	52	52	3	3	일반	과천권관리단	02-500-8423
25	과천권 유량비교측정용변실 설치	유량계변실설치5개소	계측	30일	30	30	3	3	일반	과천권관리단	02-500-8426
26	정수장 슬러지수집기 보수공사	정수장 침전지,농축조,조정조,회수조 슬러지 수집기 보수	기계	30일	47	47	3	3	일반	과천권관리단	02-500-8432
27	관호교차로 송수관로 이설공사	관접합부설(D350mm*1416m) 구조물공	토목	30일	153	153	3	3	일반	구미권관리단	054-450-4223
28	지방도 906호선 송수관로 이설공사	관접합부설(D700mm*366m) 구조물공(공기밸브실 2개소등)	토목	30일	149	149	3	3	일반	구미권관리단	054-450-4223
29	정수장 약품투입설비 보수공사	염소투입기, 정량펌프 등	기계	50일	50	50	3	3	일반	과천권관리단	02-500-8432
30	시흥(정) 조명설비 보수공사	조명설비 보수 1식	전기	50일	30	30	3	3	일반	과천권관리단	02-500-8434
31	각사업장 건축물 옥상 누수보수공사	과천, 안양, 반월, 시흥사업소 내 각동 옥상	건축	60일	300	300	3	3	일반	과천권관리단	02-500-8423

32	응집침전지 및 착수정 방수공사	시흥응집침전지(생활)7500□ 과천(구)가압장 착수정 : 600□	토목	60일	130	130	3	3	일반	과천권관리단	02-500-8423
33	여과사 전면 쇄굴 교체	여과사 270□ , 여과사리 230□ 교체	토목	60일	140	140	3	3	일반	과천권관리단	031-498-3581
34	UPS유지보수	10KVA UPS, 출전지, 분전반 등 설치	계측	60일	45	45	3	3	일반	과천권관리단	02-500-8426
35	자인(정) 옥외약품탱크 증설공사	0 약품저장탱크(STS)30M^3 : 1대 0 액위계 : 3 SET 등 설치공사	기계	60일	53	53	3	3	일반	운문댐관리단	054-370-7251
36	자인(정) 설비감시 CCTV 설치공사	0 자인(정) 설비감시용 CCTV설치 1식	통신	60일	60	60	3	3	일반	운문댐관리단	054-370-7253
37	농도계 및 수질계측기 교체	농도계, PH측정기 등	통신	60일	135	135	3	3	일반	운문댐관리단	054-370-7253
38	반월(정) 소석회투입기 및 활성탄 투입기 교체공사	소석회,활성탄 투입기 교체1식	기계	80일	86	86	3	3	일반	과천권관리단	02-500-8432
39	대청댐 창고 신축공사	창고신축 : 330□,사택 철거 및 폐기물처리,사면보강 및 도로개설	건축	90일	489	489	3	3	일반	대청댐관리단	042-930-7214
40	운문댐 휀스이설 설치공사	ㅇ휀스이전설치 : 2.6km	토목	90일	200	200	3	3	일반	운문댐관리단	054-370-7221
41	탁수방지망 설치공사	탁수방지망 600m	토목	120일	350	350	3	3	제한	임하댐관리단	054-820-2212
42	상수도 인입공사	상수도 인입 : 2.5km	토목	150일	350	350	3	3	제한	임하댐관리단	054-820-2212
43	사업장 전기설비 보수공사	충전기,충전기 밧데리 등	전기	40일	40	40	3	3	제한	창원권관리단	055-260-4721
44	오산천 하천환경정비 사업관련 지장밸브실 개량공사	*밸브실 절단 및 증고	토목	50일	100	100	3	4	일반	성남권관리단	042-629-0000
45	성남(정)침전지 트라프 개선공사	*성남정수장 침전지 트라프 추가 : 3지 *성남정수장 응집지 개구비 조정 : 3지	기계	60일	84	84	3	4	일반	성남권관리단	042-629-0000
46	성남(정),판교(가)정수지 및 침전지 청소	*성남정수장 정수지 4지 청소, 침전지 16지청소	토목	270일	81	81	3	4	일반	성남권관리단	031-720-7772
47	노후유량계교체공사	- 유량계교체2개소	계측 제어	100일	140	140	3	4	일반	울산권관리단	052-259-6258

48	본댐하류 VHF 경보제어장치 시설대체	VHF 경보제어설비 및 부대장치 설치 6식	통신	120일	108	108	3	4	일반	주암댐관리단	061-749-7218
49	팔당1취수장 조절용 펌프 설치	조절용펌프, 모터 및 부속기기류 1식 신규설치	기계	180일	367	367	3	4	일반	팔당권관리단	031-790-3332
50	원동대암댐계통 관교체공사	- 관교체 (PCC관 -> 강관) 1650mm, 연장 300m	토목	180일	300	300	3	4	일반	울산권관리단	052-259-6222
51	변실방수보강공사	- 노후변실방수 및 보강 20개소	토목	180일	200	200	3	4	일반	울산권관리단	052-259-6222
52	관내부보강공사	- 관내부 보강공사 , 연장 200m	토목	180일	102	102	3	4	일반	울산권관리단	052-259-6222
53	각사업장유지보수공사	도장1500m^2, 방수1630m^2	토목	180일	100	100	3	4	일반	울산권관리단	052-259-6222
54	제1수력 1,2호 송전선용 가스차단기(152L-1,2 GCB)분해점검보수공사	설비유지보수	전기	20일	40	40	3	4	일반	충주권관리단	043-840-1222
55	용수댐조경유지보수공사	제초작업 및 잡목제거작업	토목	210일	30	30	3	4	일반	울산권관리단	052-259-6222
56	됫섬경보국신설	국사 개축	건축	30일	20	20	3	4	일반	충주권관리단	043-840-1215
57	부유물 차단망 이설공사	-부유물차단망 이설 -이전시설보수	토목	60일	50	50	3	4	일반	소양강댐관리단	033-259-7214
58	본댐 여수로 rubber seal 교체	rubber seal 교체:200m seal clamp 철거 및 조립	기계	90일	100	100	3	4	일반	주암댐관리단	061-749-7222
59	제2호 Runner Cone부 정밀점검	Runner Cone 분해점검 및 정밀점검 : 1식	기계	30일	20	20	3	4	제한	안동댐관리단	054-850-4222
60	제2호 수차발전기 대점검	발전기, 수차 등 분해 점검	기계 전기	40일	40	40	3	4	제한	안동댐관리단	054-850-4222
61	취수탑 Trash Rack 도장	Trash Rack 도장 : 1식	기계	90일	150	150	3	4	제한	안동댐관리단	054-850-4222
62	광동댐 도로안전 시설물설치공사	가드레일 보강설치 L= 2.3□	토목	120일	200	200	3	4	제한	태백권관리단	033-550-1221~2
63	삼동단지 NO.0+24~NO.19+12 관갱생공사	관갱생(D500mm) : 750m	토목	60일	145	145	3	4	제한	창원권관리단	055-260-4721

64	팔당 2취수장 주변압기 분해점검 및 보수	주 변압기 20/25MVA 누유부분보수 절연유여과 및 변압기 점검	전기	90일	40	40	3	4	제한	팔당권관리단	031-790-3340
65	반송정수장 정수설비 보수	응집기 패들축 보수 슬러지컬렉터 체인교체 등	기계	60일	56	56	3	4	제한	창원권관리단	055-260-4725
66	제1,2수력 옥외변전소 및 송전선로 점검보수공사	설비유지보수	전기	10일	50	50	3	5	일반	충주권관리단	043-840-1222
	계 : 66건				8,486	8,486				1/4분기
1	수중 모터펌프 오버홀 공사	ㅇ 수중모터펌프 오버홀공사	기계	40일	90	90	4	4	일반	여수권관리단	061-688-5215
2	변실방수공사	침수제수변실 10개소	토목	50일	40	40	4	4	일반	여수권관리단	061-688-5222
3	광양계통구관 교체공사	관접합(D900) : 68개소	토목	50일	150	150	4	4	일반	여수권관리단	061-688-5222
4	정밀안전진단 보수보강공사	ㅇCon'c댐 월류부, 비월류부보수	토목	90일	150	150	4	4	일반	대청댐관리단	042-930-7214
5	각 사업장 MCC반 교체공사	취수장 8면, 함열가압장 7면 전주,군산가압장 6면 MCC반 교체작업	전기	90일	201	201	4	4	일반	부여권관리단	041-830-4224
6	반월(정) 구내배수로 설치	배수로 설치 1식	토목	30일	20	20	4	4	일반	과천권관리단	02-500-8424
7	각사업장 배수로 정비 및 보수공사	각사업장 배수로 정비 1식	토목	30일	20	20	4	4	일반	과천권관리단	02-500-8424
8	정수장 침전지용 슬러지 배출장치 설치공사	침전지 2지	기계	50일	48	48	4	4	일반	과천권관리단	02-500-8432
9	과천(구)가압장 착수정내 이토위탁처리공사	이토제거 및 김포메립지 반입 : 870□	토목	50일	70	70	4	4	일반	과천권관리단	02-500-8424
10	여과사 표층 삭취 및 보충	여과사 200□ 보충	토목	50일	44	44	4	4	일반	과천권관리단	031-498-3581
11	각사업장 건축물 외벽 도장공사	반월:3단계여과지,탈수동 약품탱크동 광명:3,4단계 가압펌프동	건축	60일	116	116	4	4	일반	과천권관리단	02-500-8423
12	과천가압장 저양정군 펌프임펠라 보수	저양정군 펌프 : 1500HP*3 , 800HP*2 임페라 컷팅 및 펌프 오버홀	기계	60일	34	34	4	4	일반	과천권관리단	02-500-8432
13	자인(정) 공압밸브 전동화 공사	0 역세,정수 등 유입밸브엑추레이터	기계	70일	54	54	4	4	일반	운문댐관리단	054-370-7251

14	내린천수위국 이전설치공사	수위국설치 F6(H=10m) 설비철검 및 설치, 기존수위국 철거	토목	90일	150	150	4	4	일반	소양강댐관리단	033-259-7214
15	자인(정)침전지 웨어개선 공사	ㅇ침전지웨어트라프 연장 설치 ㅇ트라프 지지대 제작설치 등	토목	90일	120	120	4	4	일반	운문댐관리단	054-370-7221
16	밸브구동용 전동구동장치 교체공사	*회수조펌프 토출밸브용 전동구동장치 등 교체 신설	기계	60일	126	126	4	4	일반	청주권관리단	043-230-4252
17	제2호 주변압기 내부점검 보수	각 플랜지 패킹교체 등	전기	40일	30	30	4	4	제한	안동댐관리단	054-850-4222
18	수문기계실 지붕 보수공사	수문부 지붕 기계실 보수 5개소	토목	90일	80	80	4	4	제한	부산권관리단	051-200-2712
19	정수장 응집지 정류벽 개량 공사	정류벽 개량 및 기둥보수 4지	토목	120일	200	200	4	4	제한	부여권관리단	041-830-4222
20	도수관로 터널보수공사	-크랙보수 1500m	토목	210일	150	150	4	4	제한	주암댐관리단	061-749-7214
21	주남, 본포 모터 보호장치 교체공사	본포 모터보호계전기 교체 1식 등	전기	45일	53	53	4	4	제한	창원권관리단	055-260-4722
22	3단계 요금고지용 노후계량기 교체	*초음파 유량계, *계량기 센서케이블 포설 등	통신	60일	211	211	4	5	일반	성남권관리단	042-629-0000
23	성남(정)4단계 펌프장, 탈수기동 옥상방수공사	*아스팔트 쉬트방수1식	토목	60일	103	103	4	5	일반	성남권관리단	031-720-7722
24	주요 밸브실 방수공사	*제수밸브실 : 13개소 *공기밸브실 : 2개소	토목	70일	103	103	4	5	일반	성남권관리단	031-720-7722
25	수도권 3,4단계 용수구 계량시험실 설치공사	*계량실험실 10개소 설치	통신	90일	165	165	4	5	일반	성남권관리단	042-629-0000
26	인공위성홍수예경보시설유지	유지보수	전자통신	90일	60	60	4	5	일반	충주권관리단	043-840-1215
27	응집제투입설비 개선공사	PAC 주입설비 1식 급속혼화방식 개선설비 1식 등	기계	100일	80	80	4	5	일반	여수권관리단	061-742-9264
28	원동구(취) 역지밸브 교체공사	유압식역지변(500□)교체 6개 유압식역지변(400□)교체 2개	기계	150일	223	223	4	5	일반	울산권관리단	052-259-6252
29	수질자동측정기 탁도계교체공사	원수,침전수,여과수,정수측정 탁도계 (시험실내)	전통	40일	80	80	4	5	일반	태백권관리단	033-550-1221~2
30	2002 과천터널보강공사	점검구 및 공기변 1개소	토목	50일	250	250	4	5	일반	과천권관리단	02-500-8422

31	수질계측기 교체	정수 탁도계 교체 : 1식 원수 알카리도계 교체 : 1식	통신	60일	73	73	4	5	일반	사천권관리단	055-851-5252
32	노후유량계 제작구매 및 설치공사	달방 유출유량계(D1,000) 사미 유입유량계(D1,000)	기계	60일	89	89	4	5	일반	태백권관리단	033-550-1253
33	홍수예경보시설 보수	시설 유지보수	토목	60일	50	50	4	5	일반	충주권관리단	043-840-1215
34	조정지댐 여수로 스톱로그 보수공사	설비유지보수	기계	60일	70	70	4	5	일반	충주권관리단	043-840-1222
35	팔당2취수장 흡수정 전염소배관 점검발판 제작설치	3,4단계 전염소배관 점검발판 200m, 배관보수 100m	기계	60일	70	70	4	5	일반	팔당권관리단	031-790-3332
36	시흥(정) 홍보관 설치공사	홍보관 및 상황실 1식	건축	80일	250	250	4	5	일반	과천권관리단	02-500-8422
37	변실 철개 및 사다리교체 공사	철개교체 및 사다리설치 30개소	토목	90일	80	80	4	5	일반	팔당권관리단	031-790-3322
38	본댐 및 역조정지댐 수문원격 제어반 교체	제어반 교체 1식	전기	90일	150	150	4	5	일반	주암댐관리단	061-749-7222
39	됫섬경보국신설	경보국 기계장치 1식	전자통신	90일	200	200	4	5	일반	충주권관리단	043-840-1215
40	우기 및 동기대비 점검보수공사	설비유지보수	기계, 전기	20일	10	10	4	5	일반	충주권관리단	043-840-1222
41	청주(정) 응집침전지 보강공사	침전지 신축이음부 보강 바닥슬래브 모르터 파손부 보수	토목	150일	121	121	4	5	일반	청주권관리단	043-230-4222
42	창원병원-대한중기-효성기계NO.57+18~NO.85+28 관로교체 공사	관로교체 및 부대공사	토목	120일	536	536	4	5	제한	창원권관리단	055-260-4718
43	운문댐 여수로 수문설치공사	ㅇ수문설치부 좌우사면 보강	토목	165일	400	400	4	5	제한	운문댐관리단	054-370-7221
44	관로시설(변류)도장	도수관로 변류 도장 174개소	토목	30일	35	35	4	5	제한	일산권관리단	031-960-6255
45	발전소 누수부 보수 공사	발전소 지하층 누수 균열 보수 1식	토목	60일	30	30	4	5	제한	안동댐관리단	054-850-4214

46	소내전원 저압선로 개량공사	ACB 차단기 2조 설치 600V CV 150□ * 3C * 100M	전기	90일	30	30	4	5	제한	임하댐관리단	054-820-2222
47	유지보수용 자재구입	Battery 120AH :20EA Battery 200AH:60EA	전기	90일	35	35	4	5	제한	임하댐관리단	054-820-2222
48	각 사업장 펌프 보수	슬리브, 베어링, 웨어링 등	기계	60일	64	64	4	5	제한	창원권관리단	055-260-4725
49	수지정수장정수지 염소접촉조설치	펌프모타2대, 체크밸브2대 등 설치	기계	120일	143	143	4	6	일반	수도권운영센타	031-260-8252
50	유량계실 울타리설치공사	휀스설치 : 350경간	토목	40일	62	62	5	5	일반	여수권관리단	061-688-5222
51	여과지 수위계 설치공사	수위계 24개 설치	통신	60일	111	111	5	5	일반	부여권관리단	041-830-4228
52	유량계 비교측정실 설치공사	유량계 이설 및 비교측정실 설치공사	기계	60일	54	54	5	5	일반	여수권관리단	061-688-5215
53	약품투입설비 개선공사	응집제 약품투입설비 개량	정수	150일	102	102	5	5	일반	부여권관리단	041-830-4284
54	사업장 시설물 개선공사	전동셔터 2대 교체, 조적(4.5*3.5), 우수배관 변경	기계	30일	36	36	5	5	일반	과천권관리단	02-500-8432
55	2002년 관로상 변류 보수공사	맨홀뚜껑증고 20개소 사면보강옹벽(1.0m*1.0m)10개소	토목	30일	23	23	5	5	일반	구미권관리단	054-450-4223
56	각사업장 설비 도장공사	안양,과천(가) 500□ , 시흥 ,반월, 광명 1000□	기계	50일	47	47	5	5	일반	과천권관리단	02-500-8432
57	각사업장 차단기 오버홀 및 보수	각 사업장 3.3KV차단기 오버홀, 패킹외 잡자재 1식	전기	50일	37	37	5	5	일반	과천권관리단	02-500-8434
58	계측제어설비 유지보수	압력계, 배수펌프 등	계측	60일	50	50	5	5	일반	과천권관리단	02-500-8426
59	신평배수지내부도장공사	*내부에폭시도장 1식 *면갈이 및 액체침투성방수 1식	토목	60일	129	129	5	5	일반	구미권관리단	054-450-4222
60	반월(정) 응집지 유입밸브 전동화공사	액츄에이터8기 설치	기계	90일	69	69	5	5	일반	과천권관리단	02-500-8432
61	과천권노후유량계 교체	초음파 유량계 교체, 자식유량계변환기 등	계측	90일	120	120	5	5	일반	과천권관리단	02-500-8426
62	댐체사석채움 공사	-주암본댐 면적 37,000□ -조절지댐 면적 110,000□	토목	90일	172	172	5	5	제한	주암댐관리단	061-749-7214

63	유금터널 보수공사	유금터널 보수보강	시설물	210일	517	517	5	5	제한	포항권관리단	054-230-4706
64	소내급수배관교체공사	탄소용 STS 강관 64A *100M	기계	60일	33	33	5	5	제한	임하댐관리단	054-820-2222
65	포항공업용수도 관로내부 보완공사	노후PC관 이음부 보강	상하수도	90일	500	500	5	5	지명	포항권관리단	054-230-4707
66	홍수예경보시설 증설	VHF 장치 신설	전자통신	120일	200	200	5	6	일반	충주권관리단	043-840-1215
67	안양,수원계통 공업용수도 비상연결공사	관로매설 L=1,250m	토목	150일	500	500	5	6	일반	과천권관리단	02-500-8422
68	댐우안 정상낙석망지망 설치	낙석방지망(2,500□)	토목	60일	60	60	5	6	일반	충주권관리단	043-840-1215
69	제2수력 방수로 수문용 갠트리 크레인 점검보수공사	설비유지보수	기계	60일	40	40	5	6	일반	충주권관리단	043-840-1222
70	밸브실개량공사	밸브실방수10개소 밸브실증고 10개소	토목	90일	250	250	5	6	일반	팔당권관리단	031-790-3321
71	염소투입설비 보수 및 개선공사	전염소 투입설비 1식 염소주입기 2대 등	기계	90일	114	114	5	6	일반	여수권관리단	061-742-9264
72	옥외잡철물 교체 및 제작설치	잡철물 철거 1식	기계	90일	50	50	5	6	일반	주암댐관리단	061-749-7222
73	광네트웤 제어장치 구매	장치구매 1식	전자통신	90일	150	150	5	6	일반	충주권관리단	043-840-1215
74	청주(정) 여과지 및 여과지동 보강공사	천장슬래브 균열보수:800m 신축이음부 보강 : 200m	토목	150일	150	150	5	6	일반	청주권관리단	043-230-4222
75	우기 및 월동대비 점검보수	소내 지하층 바닥도장 : 1식 수문점검보수 : 1식 외 기타	기계 전기	30일	10	10	5	6	제한	안동댐관리단	054-850-4222
76	태인분기점 유량계실 설치공사	*분기점 계통별 유량계실 설치 2개소	토목 전통	120일	150	150	5	6	제한	정읍권관리단	063-530-5221 063-530-5246
77	반송정수장-창원병원-세신실업 NO.37~NO.75 관로이설공사	SP, D1200mm, L=0.6km 제수밸브 및 공기밸브실 설치	토목	120일	800	800	5	6	제한	창원권관리단	055-260-4718

78	남강댐 부유물 수거작업	저수구역내 수상,육상 부유쓰레기 수거 예상수거량 : 3,500□	환경	150일	111	111	5	6	제한	남강댐관리단	055-750-1212
79	반송정수장 배출수설비 보수	- 여포세정수펌프 보수 등 교체	기계	50일	44	44	5	6	제한	창원권관리단	055-260-4725
80	여과지 안트라사이트 보충 및하부집수장치 점검보수	*안트라사이트 보충 : 384□ *하부집수장치 점검보수:2지	토목	90일	200	200	5	7	일반	청주권관리단	043-230-4226
81	수어댐사면 보강공사	수어댐공극채우기 : 1,287□	토목	60일	50	50	6	6	일반	여수권관리단	061-688-5222
82	이사천(취)건물 보강공사	균열충전보수 : 402.70m 표면보강 : 586.62□	토목	60일	100	100	6	6	일반	여수권관리단	061-688-5222
83	관로상 밸브 누수보수공사	ㅇ 관로상 밸브 누수 보수공사	기계	60일	100	100	6	6	일반	여수권관리단	061-688-5215
84	사택 유지보수 공사	사택 내부 전면 수리 및 주변부대시설 유지보수	건축	90일	300	300	6	6	일반	대청댐관리단	042-930-7214
85	정수장 응집기 패들 교체공사	응집기 패들 → PE패들 2000개 교체	기계	30일	68	68	6	6	일반	과천권관리단	02-500-8432
86	2002년 관로상 변류 도장공사	-제수, 공기, 이토밸브도장 -신축관도장	토목	30일	30	30	6	6	일반	구미권관리단	054-450-4222
87	반월(정) 슬러지 콜렉터 교체공사	슬러지 콜렉터 2대(1지분) 운행레일 보수 및 교체 1식	기계	60일	161	161	6	6	일반	과천권관리단	02-500-8432
88	옥외변전소 애자청소 및 금구류 조임	금구류 제조임, 애자, 붓싱청소	전기	10일	10	10	6	6	제한	안동댐관리단	054-850-4222
89	정수장 침전지 보수.보강공사	균열, 열화부, 신축이음부 보수	토목	120일	200	200	6	6	제한	부여권관리단	041-830-4222
90	사업장 정수지 보수.보강공사	열화부보수1,920m2	토목	120일	100	100	6	6	제한	부여권관리단	041-830-4222
91	설비감시용 CCTV설치공사	설비감시용 Color Camera 8대 H/W, S/W 설치 1식	전기	120일	220	50	6	6	제한	임하댐관리단	054-820-2222
92	우기 및 월동대비보수공사	각종 맨홀,밸브,배관 침수 및 동파대비	기계	60일	20	20	6	6	제한	임하댐관리단	054-820-2222
93	조정지 Checker Plate 교체공사	STS 강판 Bride :10.3Ton	기계	90일	65	65	6	6	제한	임하댐관리단	054-820-2222
94	성남정수장 휀스 보수공사	*PVC코팅주주를 아연도 강관으로 교체	토목	50일	86	86	6	7	일반	성남권관리단	031-720-7722

95	팔당 2취수장 케이블정리 및 온도감시장치 설치	고압저압 케이블 분리 및 케이블 온도상승에 대한 감시시설 설치	전기	90일	50	50	6	7	일반	팔당권관리단	031-790-3340
96	수도권 3,4단계 관부식 방지시설 보완공사	인천 및 의정부계통 관부식방지시설 정류기 및 anode 설치	전기	90일	200	200	6	7	일반	팔당권관리단	031-790-3340
97	밸브실개량공사	*밸브실개량 : 6개소	토목	120일	82	82	6	7	일반	청주권관리단	043-230-4222
98	취,정수장 구조물 보강공사	균열보수, 누수보강, 흄관내부보강	토목	80일	195	195	6	7	제한	사천권관리단	055-851-5221
99	수질계측기 교체공사	*탁도계 교체 : 4 SET *잔류염소계 : 2 SET	전통	120일	150	150	6	7	제한	정읍권관리단	063-530-5246
100	주남-진해(구)NO.174+5~NO.176+15관로이설공사	SP, D800mm, L=90m이설 기존관 폐쇄 및 BOX횡단	토목	60일	87	87	6	7	제한	창원권관리단	055-260-4718
	계 : 100건				12,821	12,651				2/4분기
1	가배수로터널보수공사	천공 :20개소 주입 : 102□	토목	40일	35	35	7	7	일반	여수권관리단	061-688-5222
2	CC TV 보수공사	시흥,반월 모니터, 광먕 적외선 감지기 등	계측	60일	50	50	7	7	일반	과천권관리단	02-500-8426
3	2002년 관로상 밸브실 개량공사	공기밸브실 8개소 분기제수, 이토밸브실	토목	60일	79	79	7	7	일반	구미권관리단	054-450-4223
4	정수장 정수지 도류벽 설치공사	정수지 도류벽 설치 3열* 2지	토목	90일	100	100	7	7	제한	부여권관리단	041-830-4222
5	부여계통 관로갱생공사	D=450mm, L=1km	토목	90일	100	100	7	7	제한	부여권관리단	041-830-4222
6	부여(취) 펌프교체공사	취수펌프 7대 교체	기계	120일	212	212	7	7	제한	부여권관리단	041-830-4226
7	경보국 VHF유지보수	유지보수	전자통신	40일	30	30	7	8	일반	충주권관리단	043-840-1215
8	2002년 경상보수공사(하반기)	경상보수(긴급, 점검 등)	토목 건축	270일	90	90	7	8	일반	충주권관리단	043-840-1215
9	팔당2취수장 취수구 점검 보수공사	고정식스크린 수중부 청소	기계	30일	20	20	7	8	일반	팔당권관리단	031-790-3332
10	고흥계통 시설물 도장공사	여과지동 도장공사 철구조물등 설비류 도장	기계	80일	80	80	7	8	일반	여수권관리단	061-742-9264

11	공기변 및 제수변 기어박스 교체공사	공기변 교체 30개소 제수변 기어박스 교체 10개소	토목	90일	140	140	7	8	일반	팔당권관리단	031-790-3321
12	동막(취) 구조물 철거공사	건축물 2층 110□	토목	90일	220	220	7	8	일반	팔당권관리단	031-790-3321
13	TM설비 교체공사	*현장 유량계실 TM/TC 장치 교체 *배수지 수위계 및 TM신설	전통	120일	228	228	7	8	제한	정읍권관리단	063-530-5246
14	공원매점철거 공사	공원매점 철거 1식 철거지역 조경 1식	토목	30일	30	30	7	8	제한	안동댐관리단	054-850-4214
15	반월(정) 폴리머 용해 투입설비 교체공사	투입기 및 호퍼 1대외 기타설비	기계	50일	82	82	8	8	일반	과천권관리단	02-500-8432
16	본댐 및 발전소 주변 가로등 교체공사	설비유지보수	전기	30일	80	80	8	9	일반	충주권관리단	043-840-1222
17	광동댐 및 달방댐 취수지점On-Line 수질분석계 설치	On-Line 수질분석계 설치 1식	전통	40일	125	125	8	9	일반	태백권관리단	033-550-1221~2
18	와부(정) 수처리 구조물 개선공사	혼화지 2개소,응집지 54개소 침전지 9개소 개구부 및 격벽증고	토목	60일	171	171	8	9	일반	팔당권관리단	031-790-3323
19	본댐 취수구 스톱로그 및 여수로 스톱로그 rail 보수공사	설비유지보수	기계	60일	50	50	8	9	일반	충주권관리단	043-840-1222
20	본댐 여수로 수문 도장공사	설비유지보수	기계	60일	80	80	8	9	일반	충주권관리단	043-840-1222
21	운문댐 홍수예경보제작구매설치공사	0 경보설비 1식	통신	180일	120	120	8	9	제한	운문댐관리단	054-370-7253
22	여수로 및 취수탑연결교량 보수공사	댐 정밀안전진단결과 조치	토목	90일	120	120	8	9	제한	안동댐관리단	054-850-4214
23	각 사업장 밸브 보수	디스크시트, 바디시트, 스템너트 등	기계	80일	65	65	8	9	제한	창원권관리단	055-260-4725
24	수어댐 수중폭기조 제작구매설치	ㅇ 수중폭기조 Q=500□ : 4대 ㅇ 공기압축기 50HP 설치 : 2대 등	기계	60일	100	100	9	9	일반	여수권관리단	061-688-5215
25	관전기방식 설비공사	정류기 설치 : 1개소 DEEP WELL 보링 : 1식	전기	100일	100	100	9	9	일반	과천권관리단	02-500-8434
26	구미대교 교량첨가관 보수공사	-교량첨가관보호시설보수;690m -관고정밴드(지지철물),보호함석	토목	30일	50	50	9	9	일반	구미권관리단	054-450-4223

27	정수장 배출수설비 유지보수	여포밸트, 감속기, 케익콘베이어 교체	기계	50일	68	68	9	9	일반	과천권관리단	02-500-8432
28	도로상 맨홀증고	맨홀협정서에 의한 맨홀증고 비용확보	토목	60일	33	33	9	9	일반	과천권관리단	02-500-8424
29	광명가압장 변압기 수리	22.9/6.6KV 3C 5000KVA 변압기 2대 수리	전기	60일	35	35	9	9	일반	과천권관리단	02-500-8434
30	밸브실 보수,보강공사	수도권광역상수도 밸브실 약 50개소	토목	90일	71	71	9	9	일반	과천권관리단	02-500-8424
31	구천(정) 여과지밸브 교체공사	*전동밸브:12EA(450,400,200mm각4EA) *조작판넬 4EA	기계	70일	174	174	9	9	입찰	거제권관리단	508-221
32	홍보관 유지보수 공사(2002)	외벽및 지붕개선 1식	토목	50일	120	120	9	9	제한	부산권관리단	051-200-2712
33	송수관로 밸브 교체공사	황동조절지전단 제수밸브1, 함열(가)전단 천변이토밸브1교체	토목	90일	150	150	9	9	제한	부여권관리단	041-830-4226
34	오수정화시설 유지보수	오수관로연결공사(□100mm주철관) 1000m 및 펌프실 2동시공,펌프 설비1식	토목	90일	100	100	9	9	제한	주암댐관리단	061-749-7214
35	주남, 본포 고압기기 교체공사	주남, 본포 모터 기동용 리액터 등 교체	전기	40일	50	50	9	9	제한	창원권관리단	055-260-4722
36	와부정수장 3단계 구조물 균열보수공사	균열길이:900m,모르타르 타설:40m	토목	60일	90	90	9	10	일반	팔당권관리단	031-790-3323
37	반월(정) 배수처리설비 설치공사	정수지 배수처리설비 1식	토목	60일	55	55	9	10	일반	과천권관리단	02-500-8423
38	반월(정) 정수지 도류벽설치공사	도류벽설치 3지	토목	70일	208	208	9	10	일반	과천권관리단	02-500-8423
39	직류전원설비 제조구매설치	직류전원설비 교체 : 1식 (Rectifier, Inverter 교체) 설치 및 시험	전기	120일	30	30	9	10	제한	안동댐관리단	054-850-4222
40	저구배수지 밸브 및관로 교체공사	제수밸브 교체(D700,D400mm):각2기 제수밸브실 설치:2기 등	토목	90일	100	100	9	10	제한	창원권관리단	055-260-4718
41	각 사업장 기계설비 보수	- 여과지 콤프레샤 교체 - 공압밸브 액츄에이터 보수 등	기계	45일	48	48	9	10	제한	창원권관리단	055-260-4725
42	제2수력 제1호 수차발전기 대점검보수공사	설비유지보수	기계, 전기	10일	30	30	9	11	일반	충주권관리단	043-840-1222

	계 : 42건				3,918	3,918				3/4분기
1	여수로 및 조정지 StopLog도장공사	여수로 : 1.380□ 조정지 : 950□	기계	60일	42	42	10	10	제한	임하댐관리단	054-820-2222
2	수문권양설비 Wirerope Compound도포공사	조정지:3,500□ Intake Gate :100□	기계	60일	50	50	10	10	제한	임하댐관리단	054-820-2222
3	여과지보수 및 여재 보충	여과지보수 및 여과사 보충	토목	60일	157	157	10	11	일반	태백권관리단	033-550-1221~2
	계 : 3건				249	249				4/4분기
	합계 : 211건				25,474	25,305				전체