2013년도 군산지방해양항만청 사업발주계획

사 업 명	예 산 액 (단위:백만원)	예산 배정시기	발주 예정월	준공 예정월	비 고
위도북방등표 설치	45	1/4분기	2013.1	2013.6	통합발주
북도남서방등표 설치	45
충전실 건립 설계	50	1/4분기	2013.3	2013.8
개야도남방등표 설치	690	1/4분기	2013.3	2013.9
식도(남동방)등표 설치	440	1/4분기	2013.2	2013.9
상왕등도항방파제등대 설치	100	1/4분기	2013.3	2013.6
유․무인표지 대수선	250	1/4분기	2013.3	2013.10	연중 지속추진
어청도등대 시설물 정비	150	1/4분기	2013.3	2013.6
장비대체 및 확보	150	1/4분기	2013.3	2013.6
항로표지선 수리	70	2/4분기	2013.4	2013.6
집약관리시스템 유지보수	100	1/4분기	2013.1	2013.12	연중 지속추진
달루도북동방등표 설치공사(이월)	257	1/4분기	-	2013.5
구시포 연안정비사업	300	1/4분기	2013.2	2013.12
청항선 건조	250	1/4분기	2013.2	2013.12

사 업 명	예산액	예산 배정시기	발주 예정월	준공 예정월	비고
◇ 새만금 신항
-새만금 신항만 개발사업 사후환경영향조사용역	305	1분기	'13.2	13.12	신규
-새만금신항 해양수리현상조사용역	1,200	1분기	'13.2	13.12	신규
-새만금 신항만 방파제(1단계) 축조(1공구)공사	36,320	1분기	'13.1	13.12	계속
-새만금 신항만 방파제(1단계) 축조(2공구)공사	28,700	1분기	'13.1	13.12	계속
-새만금 신항만 방파제(1단계) 축조공사 전면책임감리용역	1,840	1분기	'13.1	13.12	계속
◇ 군장항(2단계)
-금강하구 수리변화현상조사용역	284	1분기	'13.1	13.12	계속
-군산항 임항창고 신축 기본 및 실시설계용역	264	1분기	'13.2	13.12	신규
◇ 군장항 항로준설(2단계)	3,000
-군장항 항로준설(2단계) 기본 및 실시설계용역	3,000	1분기	'13.3	13.12	신규
◇ 장항항 건설
-장항항 물양장 축조공사	5,000	1분기	'13.2	13.12	계속
-장항항 물양장 축조공사 전면책임감리용역	304	1분기	'13.3	13.12	계속
◇ 항만시설 유지보수(비총액)
-잔교시설장비 유지관리점검용역	200	1분기	'13.1	13.12	신규
-군장항 부두시설 정밀점검용역	250	1분기	'13.2	13.12	신규
-장항항 친수호안 정비공사	1,500	1분기	'13.2	13.12	계속
-군산항 및 장항항 유지준설공사	5,000	1분기	'13.2	13.12	신규
◇ 재해안전항만구축
-장항항 폭풍해일 침수방지시설 기본 및 실시설계용역	1,137	1분기	'13.3	13.12	신규
- 군산항 방파제 보수보강공사	1,000	2분기	‘13.4	‘13.12	신규
- 군산항 방파제 보수보강공사 시공감리용역	50	2분기	‘13.4	‘13.12	신규